Ⅱ-8		노인복지관 건립(중부권)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○		○			정상추진	18,000
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		노인장애인과			조옥임		노인정책			3610

□ 사업목표

❍ 중부권 노인복지관 건립을 통한 노인복지 수요 충족

□ 부지현황

❍ 주  소: 학성동 425-2번지, 426-2번지, 426-8번지(구역전시장 옆)

❍ 면  적: 대지 1,008㎡(305평)

❍ 사업비: 18,000백만원(특교금 12,350, 구비 5,650)

❍ 지번별 현황

연번	주 소	토지이용	면적(㎡)		예상 사업비(백만원)
			대 지	건축물	계	공사비	부지매입	건물매입	이전비등
계	3개소		1,008 (305평)		18,000	12,578	5,287	81	54
➊	학성동 425-2	일반상업	797 (241평)	269	16,793	12,578	4,171	44
❷	학성동 426-2	〃	112 (34평)	61	596	-	587	9	-
❸	학성동 426-8	〃	99 (30평)	48	611	-	529	28	54

□ 추진상황

❍ 건립 부지 최종 검토보고: 2023. 1월

❍ 노인복지관 건립 추진 계획: 2023. 7월

❍ 지방재정 투자심사 의뢰: 2023. 8월

❍ 도시관리계획 결정용역 실시: 2023. 10월

❍ 도시관리계획(사회복지시설)결정 고시: 2023. 12월

❍ 공공건축기획 용역: 2024. 1월~7월

❍ 토지 및 지장물 보상: 2024. 3월~12월

❍ 건축 규모 변경 계획 수립: 2024. 11월

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
진행률	예산 집행현황	100%	-	1%	15%	15%	69%

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	18,000	5,650			20	20	4,230	4,230	1,400	1,400	12,350
국비
시비
구비	18,000	5,650			20	20	4,230	4,230	1,400	1,400	12,350

□ 연도별 예산집행 현황

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	5,650	2,685			20	20	4,230	2,665	1,400
국비
시비
구비	5,650	2,685			20	20	4,230	2,665	1,400

□ 향후 추진계획

❍ 건축 설계공모: 2025. 6월~9월

❍ 실시설계용역: 2025. 10월~2026. 4월

❍ 설계 경제성 검토, 건축 협의 등: 2026. 5월~8월

❍ 공사추진: 2026. 5월~2027. 6월

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2022	9~12월	노인복지관 건립 타당성 용역 실시
2023	1~12월	건립추진계획 수립 및 공유재산관리계획 반영
2024	1~12월	부지 매입 및 건축규모 변경
2025	1~12월	사전행정절차 재이행 및 실시설계용역
2026	5~12월	공사추진 및 준공

□ 기대효과

❍ 노인여가 시설 확충으로 노인의 여가 선용과 건강한 노후생활 지원