Ⅱ-12		영유아 돌봄 확대

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○		○	○		○			○		완료후계속	비예산
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		가족복지과			김미경		여성청소년			4900

□ 사업목표

❍ 핵가족화로 약화된 가족돌봄 기능을 보완하고, 지역사회가 참여하는       돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

□ 사업개요

❍ 사 업 명: 공동육아나눔터 운영(1개소 추가)

❍ 개    원: 2025. 3월(예정) ※ 공사진행에 따라 변동 가능

❍ 위    치: 계변로 11(학성동)

※ 학성육성프로젝트(주차장 및 사회복지시설 조성)로 가족센터 내 공동육아나눔터 조성: 도시과 추진

❍ 내    용

- (공간제공) 자녀 돌봄을 위한 안전한 공간 제공

- (프로그램 운영) 부모 등 보호자와 자녀가 함께하는 프로그램 운영

- (공동육아 지원) 지역 주민이 함께하는 품앗이 돌봄 공동체 구성ㆍ운영

· 품앗이 정의: 이웃들이 자녀를 함께 돌봄으로써 육아 부담을 덜고

공동체 정신을 함양하는 공동 활동

· 품앗이 유형

구분	돌 봄	공동활동	나 눔	소 통
내용	등하원 지원, 긴급ㆍ일시돌봄	체험, 놀이, 독서, 봉사	반찬, 육아ㆍ교육	육아ㆍ생활정보, 가족교육ㆍ상담

□ 추진상황

❍ 2017년 도시활력증진지역 개발사업 공모 선정(도시과): 2016. 10.

❍ 사회복지시설 건립 대상지 결정                     : 2021. 1.~7.

❍ 공공건축 심의                                 : 2022. 8.

❍ 설계공모 공고                                  : 2022. 10.

❍ 설계공모 (재)공고                                : 2022. 12.

❍ 기본설계 완료                                    : 2023. 4.~6

❍ 건축허가 완료                                    : 2023. 9.

❍ 계약심사 완료 및 공사 발주                       : 2023. 10.~11.

❍ 착공                                             : 2023. 12.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계	식	1	-
공사착공	식	1
공사완료 개관	식	1

□ 향후 추진계획

❍ 준공                                      : 2025. 1.

❍ 개원                                            : 2025. 3.(예정)

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2022	8월	공공건축 심의
	10월~12월	설계공모 공고(재공고)
2023	4~10월	기본 및 실시 설계 완료
	10~11월	계약심사 완료 및 공사 발주
2024	1~12월	사회복지시설 조성(가족센터 내 공동육아나눔터)
2025	1월	준 공(예정)
	3월	개 원(예정)
2026이후	연중	공동육아나눔터 운영(품앗이 돌봄 등)

□ 문제점 및 대책

❍ 설계공모 (재)공고 등으로 가족센터 내 공동육아나눔터 조성이 다소 지연 되어 25년 1월에 준공이 예상됨

□ 기대효과

❍ 부모 등 보호자들이 양육정보를 공유하고, 자녀를 함께 돌보는 품앗이활동으로 가족기능 강화