Ⅱ-13		다함께 아동 돌봄센터 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○		○	○	○	○			○		정상추진	70
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		가족복지과			김미경		드림스타트			4930

□ 사업목표

❍ 초등학교 방과 후 돌봄서비스 제공으로 초등 돌봄 사각지대 해소

□ 사업개요

❍ 사업대상: 1개소

❍ 위    치: 서동우정LH1단지아파트 내 주민공동시설(종가로 668-9)

❍ 주요시설: 전용면적 108.81㎡ / 활동실, 사무실, 조리공간 등

❍ 운영방법: 직영 또는 위탁운영(5년)

❍ 설치비용: 70,000천원(면적132㎡ 미만 기준)

- 설치비   50,000천원(국 50%, 시 25%, 구 25%)

- 기자재비 20,000천원(국 100%)

□ 추진상황

❍ 2023. 7. 번영로센트리지 아파트 설치공간 확인

ｏ 번영로센트리지 아파트는 의무 설치 대상 미포함으로 현재 유휴공간 없음

ｏ 입주완료 후 주민의견 수렴, 주민공동시설 등 확보하여 설치 추진 필요

❍ 2023. 10. 수요예측 데이터 기반 돌봄시설 입지분석

❍ 2023. 11. 관내 공동주택 및 경로당 유휴공간 수요조사

❍ 2024. 1. 번영로 센트리지 5개단지 유휴공간 조사 및 안내

❍ 2024. 2. 번영로 센트리지 3단지 내 설치 관련 협의 등

❍ 2024. 3. 번영로 센트리지 입주민 반대로 설치 주민투표 중단

❍ 2024. 4.~ 5. 시설 설치 관련 동향 파악 및 의견 수렴

❍ 2024. 5.~ 9. 시설 설치 대체 장소 수요 조사

❍ 2024. 10. 대상지 최종 선정(서동 우정LH1단지아파트)

❍ 2024. 11. 설치장소 제공 업무협약 및 공사의뢰(시설지원과)

❍ 2024. 12. 위탁운영자 모집 공고

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
다함께 돌봄센터 설치	개소	1	-	입지분석,수요조사	위치선정,리모델링, 기자재구입	센터 개소,운영	-

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	70	70					70	70
국비	45	45					45	45
시비	13	13					13	13
구비	12	12					12	12

□ 향후 추진계획

❍ 위탁운영자 선정 및 기자재 구입                  : 2025. 2.

❍ 개소 및 운영                                    : 2025. 3.

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2022	-
2023	9~12월	돌봄시설 입지분석 및 수요조사
2024	1~11월	대상지 선정 및 장소제공 업무협약
2024	12월	시설 리모델링 및 위탁자 모집
2025	1~2월	위탁자 선정 및 기자재 구입
2025	3월	다함께 돌봄센터 개소

□ 문제점 및 대책

❍ 대단지 아파트 내 주민공동시설 등 유휴공간 부족으로 설치장소 선정에 어려움이 있었으나, 최종 설치 대상지 결정 후 리모델링 공사를 위한 설계 진행 중으로 25년 상반기 센터 개소 예정

□ 기대효과

❍ 맞벌이 가정 및 자녀 돌봄이 어려운 부모가 마음 놓고 초등학생 자녀를 맡길 수 있는 환경 조성