Ⅲ-3		반려동물과 함께하는 가족 공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○			○		○				○	완료후계속	비예산
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		경제정책과			김계화		반려동물정책			3330

□ 사업목표

❍ 반려동물과 함께 할 수 있는 가족 공원 조성

□ 사업개요

❍ 기    간: 2023년~2026년

❍ 위    치: 성안동 일대

❍ 사업규모: 33,000㎡~66,000㎡

❍ 주요시설: 동물보호공간, 반려동물 문화공간, 힐링공간 등 부대시설

◦ 동물보호공간: 입양 및 보호시설, 학대동물 피난처, 동물매개치료 및 질병진단센터

◦ 문화공간: 운동장, 카페, 스포츠경기장 등

◦ 힐링공간: 산책로, 숙박시설, 야영장 등

❍ 총사업비: 28,706백만원(국 1,600, 시 27,106)  ※ 市 사업연계 추진

□ 추진상황

❍ 반려동물 건강문화센터 후보지 제출(구→시 농축산과): 2022. 10. 20.

❍ 대전 반려동물보호센터 견학(지역경제과): 2023. 10. 26.

❍ 반려동물 건강문화센터 건립 용역(사전타당성 포함): 2023. 2.~12.

※ 적정 입지 선정(위치, 면적, 규모 등) 관련 법령 검토

❍ 반려동물 건강문화센터 성안동 유치(시 부지선정위원회 선정): 2024. 1. 30.

❍ 지방재정투자심사 완료(270억): 2024. 2. 26.

❍ 사전절차 이행: 2024. 3.~2024. 12.

(예산 확보, 재해영향성 검토 등 각종 영향평가)

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
				건립용역	후보지결정	토지보상	공사시행
구분	개소	1		1	1	1	1

□ 주민참여

❍ 대상지 인근 주민 의견청취 및 협의 필요

□ 향후 추진계획

❍ 토지 감정평가 보상      : 2025. 1.~2025. 12.

❍ 재해, 환경, 건축기획용역 : 2025. 4.~2026. 9.

❍ 공공건축심의 및 설계공모: 2025. 5.~2026. 4.

❍ 건축 기본 및 실시설계   : 2026. 5.~2027. 4.

❍ 건립 공사 시행 및 준공  : 2027. 5.~2028. 6.

□ 연도별 추진계획

추진일정	추 진 계 획
2023. 2.~12.	반려동물 건강문화센터 건립 용역 추진(시 농축산과)
2024. 1. 30	반려동물건강문화센터 성안동 유치
2024. 2.~12.	사전절차 이행(중기재정계획, 지방재정투자심사, 재해영향성 검토 등)
2025.	도시계획시설 실시계획 인가 및 토지보상 등
2026 이후	공사시행

□ 기대효과

❍ 반려인 친화 공간 조성 및 성숙한 반려동물 문화 조성