Ⅲ-5		원도심-혁신도시 간 연결통로 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○				○	완료후계속	295
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		건설과			김지훈		토목			3830

□ 사업목표

❍ 공간적으로 분리된 원도심과 혁신도시를 연결하여 지역 간 기능보완을 통한 도시발전 도모

❍ 도로의 연계기능 강화로 지역 간 접근성 향상을 통한 지역상권 활성화 및 도시 경쟁력 회복

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022년 ~ 2026년(4년간)

❍ 위    치: 원도심 내 남·북측 도로(옥골샘3길·4길)

❍ 내    용: 원도심 도로확장 및 보행공간 확보

- 보행자 중심 연결도로 개설(동원개발, 신세계 연계 검토)

- 혁신도시(북부순환도로)~원도심(번영로) 연결도로 확장(울산시 건의)

- 문화의전당~성남 간 보행 기반시설 확충

□ 추진상황

❍ 2022.  8. ~    : 기초자료 조사

❍ 2023.  4. ~  7.: 원도심 도로확장 타당성 검토 용역

❍ 2023.  8. ~ 12.: 원도심~혁신도시 간 도로확장 추진 건의(시 관련부서)

❍ 2023. 11. ~ 12.: 원도심 일원 보행공간확보 실시설계용역

❍ 2023. 12.      : 교통체계 개선(일방통행) 교통안전시설심의(중부경찰서)

❍ 2024.  1. ~  5.: 원도심 일원 보행로 확보 및 교통체계 개선 완료

❍ 2024.  3. ~    : 원도심 도로 확장 건의(건설과→시 건설도로과)

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025년 이후
원도심 도로 확장 및 보행공간 확보	개소	1	기초자료 조사	타당성 조사 및 도로개설 건의	보행공간 확보 및 교통체계 개선	도로확장 추진 (울산광역시)

□ 주민참여

❍ 원도심 도로확장 필요성, 위치, 규모, 시기에 대하여 향후 주민설명회 개최

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	295	295			295	295
국비
시비
구비	295	295			295	295

□ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	295	264			295			264
국비
시비
구비	295	264			295			264

□ 향후 추진계획

❍ 2025년 ~ : 혁신도시~원도심 연결도로 확장 추진(울산광역시)

※ 민간 주택건설사업 연계 추진 시 일정 변동 가능

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2022	2022. 8. ~	기초자료 조사
2023	2023. 5. ~ 12.	타당성 검토 용역 및 도로개설 건의(시 관련부서)
2024	2024. 1. ~ 5.	원도심 일원 보행로 확보 및 교통체계 개선
2025이후	2025. ~	도로확장 추진(울산광역시)

□ 기대효과

❍ 원도심 보조간선도로 확장으로 원활한 교통소통 유도 및 정주환경 개선을 통한 지역상권 활성화