Ⅳ-1		학성공원 일원 복합문화 공간 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○		○			완료	9,936
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		문화관광과			김경수		문화예술			3660

□ 사업목표

❍ 학성공원 일원 주변정비와 다양한 복합문화 공간 조성을 통한 지역주민 문화향유 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2023년~2024년

❍ 위    치: 학성공원 일원

❍ 사업내용: 학성공원 일원 복합문화공간 조성

- 학성나무학교 및 활력센터 조성, 학성 가구거리 리디자인 사업 추진

❍ 추진방법: 도시과「학성 도시재생 사업」사업과 연계 추진

❍ 사 업 비: 9,936백만원

□ 추진상황

사업명	사업개요	추진상황
학성나무학교 조성	◦ 위 치: 학성동 134-1번지 일원 ◦ 기 간: 2019년~2023년 ◦ 내 용: 나무학교(지상2층, 연면적 391.05㎡) 및 마을주차장 조성 ◦ 사업비: 4,700백만 원	◦ 건축설계 추진: `21. 3월~`22. 3월 ◦ 공사 시행: `22. 6월~`23. 2월 (준공:‘23. 2. 3.)
학성가구거리 활력센터 조성	◦위 치: 학성동 192-25번지 ◦기 간: 2022년~2024년 ◦내 용: 지하1층, 지상4층 (연면적 845.8㎡) 가구판매(체험)공간 및 쇼룸 등 ◦사업비: 3,736백만 원	◦내진성능평가용역 추진 : `22. 12월~`23. 2월(완료: `23. 2. 17.) ◦실시설계 용역 추진: `23. 1월~6월 ◦내진보강(구조) 용역 및 제3자 검증 추진 : `23. 4. 10.~6. 30. ◦내진보강(구조) 및 실시설계 용역 완료 : `23. 6. 30. ◦학성동도시재생활성화계획 변경승인 : `23. 11. 8. ◦공사 시행: `23. 10월~`24. 5월 (준공: ‘24. 5. 5.)
학성가구거리 리디자인사업	◦위 치: 가구거리 일대 ◦기 간: 2021년~2023년 ◦내 용: 보행환경개선(L=440m, B=20m) ◦사업비: 1,500백만 원	◦실시설계 추진 : `21. 4월~`22. 12월 ◦공사 시행 : `23. 2월~`23. 7월(준공:‘23. 7. 28.)

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
조성건수	건	3	-	2	1	-	-

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	9,936	9,936	9,936	9,936
국비	4,518	4,518	4,518	4,518
시비	2,259	2,259	2,259	2,259
구비	3,159	3,159	3,159	3,159

□ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	9,936	9,139	9,936	4,799		2,893		1,447
국비	4,518	4,453	4,518	2,850		1,592		11
시비	2,259	2,222	2,259	980		642		600
구비	3,159	2,464	3,159	969		659		836

□ 향후 추진계획

❍ 학성 도시재생사업 관련 도시과와 지속적 협의

□ 기대효과

❍ 학성동의 역사, 문화, 자원을 활용한 생활환경개선 및 상권활성화 도모

❍ 학성공원과 연계한 다양한 문화프로그램 운영으로 주민 만족도 제고