Ⅳ-3		조선통신사 이예기념관 건립

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○			○	○	○				○	정상추진	70
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		문화관광과			김경수		문화유산			3650

□ 사업목표

❍ 울산 출신의 한국 외교사를 대표하는 충숙공 이예 선생의 문화적ㆍ역사적 업적 재조명을 통해 문화관광 인프라 구축

□ 사업개요

❍ 위    치: 태화동 834-4(충숙공 이예선생 유허비각) 인근

❍ 사업기간: 2023년~2026년(4년)

❍ 사업규모: 부지 635㎡ / 연면적 762㎡, 지하1층 ~ 지상1층

❍ 사업내용: 충숙공 이예 기념관(전시실, 체험실, 영상실)

□ 추진상황

❍ 용역비 확보(시ㆍ구 제1회 추경): 2023. 5. / 70백만원(시 50, 구 20)

❍ 용역 추진 계획 수립 및 추진방향 검토: 2023. 7. ~ 8.

❍ 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진
- 계약심사                  : 2023.  8. 25.

- 제안서평가위원회 개최     : 2023. 10. 24.

- 업체선정(협상에 의한 계약) : 2023. 11. 14.

- 용역 착수                 : 2023. 11. 20.

- 착수보고회 개최           : 2023. 11. 29.

- 중간보고회 개최           : 2024.  4. 15.

- 최종보고회 개최           : 2024.  7.  8.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
용역비 확보 및 기본계획 용역 추진	식	2		1	1

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	70	70			70	70
시비	50	50			50	50
구비	20	20			20	20

□ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	70	61			70			61
시비	50	43			50			43
구비	20	18			20			18

□ 향후 추진계획

❍ 지역정서, 사업 우선순위 등을 고려하여 장기적 추진 검토

□ 연도별 추진사항

년도	추진일정	추 진 사 항
2023	5월~12월	예산확보 및 추진방향 검토
2024	상반기	이예 기념관 건립 기본계획 용역 추진
	하반기

□ 문제점 및 대책

❍ 이예 등 외교기념관 건립 타당성 확보

- 2018년 이예기념관 건립 추진 당시 시 지방재정 투자사업 심사 결과 기존 유사시설 활용 및 구 재정부담 가중 등 이유로 재검토

-「이예 등 외교기념관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」(2024)결과 단독 이예기념관 건립 타당성 등 부족에 따라, 대안시설로 울산의 인물들을 주제로 한 울산역사인물박물관 건립 추진 제안

□ 기대효과

❍ 우리 지역의 인물에 대한 문화콘텐츠 구축으로 다양한 역사문화 인프라 조성

❍ 인근 국가유산 및 문화시설과 연계하여 관광 인프라 구축