Ⅴ-2		태화강 둔치 실버 파크골프장 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○			○		정상추진	2,000
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		교육체육과			오창훈		체육시설			8340

□ 사업목표

❍ 어르신의 건강증진 및 여가활동 기회 제공으로 생활체육 활성화에 기여

❍ 급증하는 중장년층의 파크골프 수요에 대응하고, 장애인 전용 파크골프장을 설치하여 장애인체육 진흥 및 체육복지 실현에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치: 관내 강변둔치 1개소

❍ 사업기간: 2023년~2026년

❍ 사업규모: 부지면적 20,000㎡ 이내

❍ 사업내용: 2개 코스(총 18홀), 부대시설 등

❍ 사 업 비: 2,000백만원(시 250, 구 1,750)

□ 추진상황

❍ 파크골프장 조성 지원사업 선정(시→구)    : 2023.  2.

❍ 기본설계 용역 착수                       : 2023.  5.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 용역 착수	개소	1		1
실시설계 용역 착수	개소	1				1
파크골프장 착공	개소	1				1

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	2,000	310			310	310			1,690
국비
시비	250	250			250	250
구비	1,750	60			60	60			1,690

□ 향후 추진계획

❍ 기본설계용역 완료                 : 2025.  2.

❍ 실시설계 용역, 하천점용허가 등     : 2025.  3.~2025. 10.

❍ 공사 착공 및 준공                 : 2025. 11.~2026.  5.

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2023	5.~12.	‧ 기본설계용역
2024	1.~12.	‧ 기본설계용역
2025	1.~12.	‧ 기본설계용역 완료 및 사업대상지 선정 ‧ 실시설계 용역, 하천점용허가 ‧ 공사 착공
2026	1.~5.	‧ 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 강변 파크골프장 설치에 대한 하천점용허가 협의 어려움 예상

□ 기대효과

❍ 하천부지를 활용한 체육시설 확충으로 생활체육 활성화

❍ 동천파크골프장과 연계한 지역 내 파크골프 중심지로 도약