Ⅴ-5		반구1동 행정복지센터 확장 및 이전

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○				○	정상추진	9,235
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		회계과			장언순		재산관리			3190

□ 사업목표

❍ 반구1동 행정복지센터 확장 이전을 통해 쾌적한 행정서비스 제공     ❍ 복합화구성으로 지역주민에게 양질의 복지·문화·소통의 공간 마련

□ 사업개요

❍ 기    간: 2022. 7. ~ 2027. 5.

❍ 장    소: 반구동 452-1(현, 반구어린이집 / 1,985.6㎡)

❍ 규    모: 1,800㎡(지상 4층)

❍ 주요시설: 민원실, 업무공간, 복합문화공간, 도서관 등

❍ 소요예산: 9,235백만원(구비)

□ 추진상황

❍ 반구1동 행정복지센터 확장 이전 복합화 검토 보고  : 2022. 7월

❍ 주민설명회 개최                                  : 2022. 8월

❍ 중기지방재정계획 수립                            : 2022. 10월

❍ 타당성조사 및 기본계획수립 용역 완료             : 2023. 2월

❍ 반구1동행정복지센터 복합화 건립 추진단 구성·운영  : 2023. 3월

❍ 공유재산관리계획 심의                            : 2023. 4월

❍ 공유재산관리계획 중구의회 의결                   : 2023. 5월

❍ 시 지방재정투자심사 자료 제출                   : 2023. 8월

❍ 반구1동행정복지센터 건립비용 공개(누리집)         : 2023. 8월

❍ 시 지방재정투자심사(조건부, 2단계 심사)           : 2023. 10월

❍ 시 지방재정투자심사(2단계 심사완료, 조건부)       : 2024. 2월

※ 조건부 의견: 현 청사(부지포함)의 활용방안 수립 후 사업 시행

❍ 반구1동 행정복지센터 현 반구1동 청사 활용계획 수립 : 2024. 3월

❍ 반구1동 행정복지센터 및 반구어린이집 건립 건축기획 용역 : 2024. 4~12월

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
행정절차 30 실시설계 30 건축공사 40	%	100	10	10	10	30	40

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2023까지		2024		2025		2026
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	9,235	1,567	19	19	348	348	1,200	1,200	7,668
국비	800	800					800	800
시비
구비	8,435	767	19	19	348	348	400	400	7,668

□ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2023까지		2024		2025		2026
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	1,567	35	19	18	348	17	1,200
국비	800						800
시비
구비	767	35	19	18	348	17	400

□ 향후 추진계획

❍ 설계 공모 및 건축설계, 건축협의 등        : 2025. 1월 ~ ’26. 1월

❍ 공사 착공 및 준공                         : 2026. 2월 ~ ’27. 5월

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2022	7 ~ 12월	기본계획수립(타당성조사)용역 추진 중기지방재정계획 심의
2023	1 ~ 12월	공유재산심의회 심의, 공유재산관리계획 구의회 승인, 시 지방재정투자심사(조건부, 2단계 심사)
2024	1 ~ 3월	시 재정투자심사(2단계 심사) 완료(조건부), 현 청사 활용계획 수립
	4 ~ 12월	건축기획, 사업계획 사전검토, 구 건축심의위원회 기획심의
2025	1 ~ 4월	설계공모 및 당선작 선정
	5 ~ 12월	건축설계 용역, 건축협의 등 추진
2026	1월	건축설계 용역 완료
	2 ~ 12월	공사 착공 및 공사 추진
2027	1 ~ 5월	공사 추진 및 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 공사 착공 전 반구어린이집 부지 외부 도로 노점상 정비 선행

⇒ 반구1동행정복지센터 복합화 건립 추진단 구성·운영(건립종료시까지)

행정복지센터 건립, 노점상 정비 등에 대하여 분야별 담당부서에서 사업   추진하고, 추진상황 점검 및 자료 공유 등 협업 추진 체계 마련

❍ 사업예산 확보 노력

⇒ 특교금 및 특교세 적기 신청 추진

⇒ 보존부적합 공유지(일반재산) 적극적 매각 추진

⇒ 반구1동 행정복지센터 확장 이전 후 추가 매입한 주택과 함께          현 청사 매각하여 신청사건립기금 재원 충당

□ 기대효과

❍ 다양한 행정ㆍ복지ㆍ문화서비스 욕구를 충족 및 주민서비스 향상

❍ 반구시장과 연계한 공공건축 건립으로 환경개선 및 지역 활성화 기여