Ⅴ-12		실내 종합체육관 건립

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○				○	정상추진	36,229
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		교육체육과			오창훈		체육시설			8340

□ 사업목표

❍ 혁신도시 조성으로 인구가 급증함에도 체육시설 및 여가 시설 턱없이 부족

❍ 중구만 구에서 운영하는 체육관이 없어 구민들의 실내체육관 조성 요청 쇄도

❍ 실내체육관 조성으로 다양한 생활체육 여가증진 및 구민 삶의 질 향상

□ 사업개요

❍ 위    치: 복산동 704-2, 혁신도시 제3호 근린공원(달빛공원)

❍ 사업기간: 2022년~2028년

❍ 사업규모: 35,275㎡(소유: 울산광역시)

- 부지/건축/연면적: 35,275㎡ / 2,312㎡ / 4,019㎡ (지상 4층)

❍ 사업내용: 다목적체육관, GX룸, 체력측정실, 부대시설 등

❍ 소요예산: 36,229백만원(공사비 28,160, 부지매입비 3,030, 용역비 등 5,039)

□ 추진상황

❍ 부지사용 협의                         : 2022. 10.~2022. 11.

❍ 실내체육관 건립 기본계획 용역         : 2023.  1.~2023.  9.

❍ 국비(30억원) 공모사업 선정             : 2023.  9.

❍ 실내체육관 건립 공원조성계획(변경) 용역: 2023.  9.~2024.  4.

❍ 실내체육관 건립 건축기획 용역 착수    : 2024.  6.

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	36,229	6,109	79	79			3,230	3,230	2,800	2,800	30,120
국 비	3,000	3,000					200	200	2,800	2,800
시 비	30,120										30,120
구 비	3,109	3,109	79	79			3,030	3,030

□ 연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	6,109	95	79			53	3,230	42	2,800
국비	3,000	25					200	25	2,800
시비
구비	3,109	70	79			53	3,030	17

□ 향후 추진계획

❍ 건축기획용역 완료                      : 2025.  5.

❍ 부족사업비 확보                        : 2025. 상반기

❍ 중앙투자심사, 설계공모, 기본 및 실시설계: 2025.  7.~2026.  5.

❍ 공사착공 및 준공                       : 2026.  6.~2028.  2.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업부지 선정	개소	1	1
기본계획 용역 완료	개소	1		1
공원조성계획 변경 완료	개소	1			1
건축기획용역 완료	개소	1				1
실내종합체육관 착공	개소	1					1

□ 문제점 및 대책

❍ 대규모 사업비가 투자되는 사업인 만큼 사업비 확보 방안 필요

❍ 시 관련 부서와 긴밀한 협조 체제 구축 강화

□ 기대효과

❍ 공공실내체육관 건립으로 구민체육진흥 및 체육복지 실현

❍ 관내 최초 실내체육관 운영으로 중구민의 자긍심 및 애향심 고취