Ⅰ-7		태화시장 공영주차타워 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○			○		정상추진	13,330
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		전통시장과			고수옥		전통시장			3320

□ 사업목표

❍ 태화시장 인근 공영주차장 확충을 통한 주차난 해소 및 편의 제공

□ 사업개요

❍ 기    간: 2023년 ~ 2025년

❍ 위    치: 태화종합시장 제2공영주차장

❍ 사 업 비: 13,330백만원

❍ 사업내용: 주차전용건물 건립

□ 추진상황

❍ 사전행정절차 이행                        : 2022. 9.~2023. 2.

- 2023~2027년도 중기공유재산관리계획 수립 및 심의

- 2023~2027년도 중기지방재정계획 및 재정영향평가 심의

- 지방재정 투자심사(시) 심의

❍ 전통시장 주차환경개선사업 공모 신청      : 2023. 1.~4.

- 중소벤처기업부 주차환경개선 공모 신청

- 전통시장 주차환경개선사업 현장평가

- 울산광역시 주차환경개선사업 선정위원회

- 중소벤처기업부 최종선정협의회 결과 통보 : 적정

❍ 예산확보(공유재산심의 및 당초예산 편성)   : 2023. 10.~12.

❍ 공공건축 기획 용역                       : 2024. 2.~5.

- 공공건축심의위원회                      : 2024. 4. 30.

❍ 지반조사용역, 설계용역 수행자 선정        : 2024. 6.~8.

❍ 실시설계용역(BF인증 포함)                 : 2024. 8.~2025. 1.

❍ 기본 및 실시설계용역 착수보고회: 2024. 9. 20.

❍ 기본 및 실시설계용역 중간보고회: 2024. 11. 12.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025
사전절차이행	식	1
건축기획, 실시설계	식	1
공사착공	식	1

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	13,330	13,330					13,330	10,572		2,758
국비	7,998	7,998					7,998	6,343		1,655
시비	2,666	2,666					2,666	2,114.5		551.5
구비	2,666	2,666					2,666	2,114.5		551.5

□ 향후 추진계획

❍ 공사 계약심사 및 일상감사 등        : 2025. 2.~4.

❍ 착공 및 준공                         : 2025. 5.~2026. 2.

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2023	8.~12.	예산확보
2024	1.~12.	건축기획용역, 실시설계
2025	5.~12.	착공 및 준공
2026이후	1.~12.	주차장 운영

□ 기대효과

❍ 불법 주정차 근절 및 주차환경 개선

❍ 관광객 및 시장 이용객 증가로 인한 지역 상권 회복