Ⅰ-8		태화강국가정원 인근 공영주차장 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기
○				○	○				○	정상추진	19,500
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호
		교통과			김선희		교통행정			3960

□ 사업목표

❍ 주차기반시설 확충으로 태화동 일대 만성적인 주차난 완화

❍ 태화강국가정원 일대 주차공간 확보로 관광객 주차편의 제공 및 상권 활성화 기여

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2024년 ~ 2027년

❍ 위   치 : 태화동 483-15번지 일원

❍ 규   모 : 3층 4단 주차장(연면적 6,000㎡, 주차170면)

❍ 사 업 비: 195억원(시비 100, 구비 95)

※ 보상비 100억 / 공사비 등 95억

□ 추진상황

❍ 태화강 국가정원 인근 공영주차장 조성 계획 수립   : 2022. 10.

❍ 중기지방재정 계획 반영 및 市 지방재정투자심사 제출   : 2022. 12.

❍ 태화강국가정원 공영주차장 관련 市 교통기획과 협의 : 2024. 8.~10.

❍ 市 지방재정투자심사 신청 및 조건부승인(교통혼잡최소화) : 2024. 11.

❍ 보상비 확보(시비)                                : 2025. 1.

□ 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공영주차장 조성	개소	1					1

□ 연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	19,500	19,500							10,000	10,000	9,500	9,500
국비
시비	10,000	10,000							10,000	10,000
구비	9,500	9,500									9,500	9,500

□ 향후 추진계획

❍ 보상계획 수립 및 부지매입                      : 2025. 1.~2026. 4.

❍ 중기공유재산계획 반영 및 공유재산관리계획 심의 : 2025. 10.

❍ 기본 및 실시설계(공공건축심의 포함)             : 2026. 5.~12.

❍ 착공 및 준공                                   : 2027. 1.~12.

□ 연도별 추진계획

년도	추진일정	추 진 계 획
2025	1. ~ 12.	보상계획 수립 및 부지매입, 공유재산 심의
2026	~ 12.	부지매입, 기본 및 실시설계
2027이후	~ 12.	착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 주민공청회 등 지속적인 협의로 이주 및 보상 진행(약 27세대, 거주민 49명 정도)

❍ 특별교부세 및 특별교부금, 특별회계 세입 등 공사비 확보 노력

□ 기대효과

❍ 주차공간 확충으로 관광객들에게 편리하고 쾌적한 관광기회 제공

❍ 인근 지역주민들의 주차난 완화로 교통질서 확립 및 삶의 질 향상 도모